망우본동 도시재생활성화계획(안) 수립에 따른 구의회 의견청취의 건
의안 번호	239
			제출연월일:	2023. 8. 25.
			제 출 자:	서울특별시 중랑구청장
			소 관 부 서:	주거개선과(2094-2812)

1. 제안이유

2020년 9월 1일 서울형 도시재생활성화지역으로 선정된 중랑구 망우본동의 도시재생활성화계획(안)에 대하여 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」제20조제3항에 따라 서울특별시 중랑구의회의 의견을 청취코자 의안을 제출합니다.

2. 주요내용

가. 의 안 명 : 망우본동 도시재생활성화계획(안) 수립에 따른 구의회 의견청취

나. 사업개요

1) 위    치 : 중랑구 망우본동 182-34일대

2) 면    적 : 154,000m2

3) 사업기간 : 2020.9.~2025.12.

4) 총사업비 : 100억원 (시비 90억, 구비 10억)

다. 도시재생활성화계획(안) 개요

1) 목   적 : 노후 주거지 주거환경개선을 위한 주민들의 의지를 독려하고                지역 특성에 맞는 도시재생사업을 추진하여 망우본동 주민들의                삶을 한층 더 풍성하게 지원

2) 주요내용

- 노후주택 밀집지의 맞춤형 개발·정비(모아타운 등) 지원을 통해 살고 싶은 정주환경 구축

- 생활 SOC(공영주차장 및 약자동행시설) 조성을 통해 주민 편의 증대       - 안전한 통학로 확보를 통한 가로환경 조성

3) 사업구상(안)

3. 참고사항 등

가. 추진경위

- ´20. 09. 01. : 5단계 서울형 도시재생활성화지역 선정

- ´21. 03. 02.  : 도시재생활성화계획 수립 용역 및 공동체활성화 지원용역 착수

- ´22. 12. 16. : 도시재생활성화수립 재구조화 용역(2차) 착수

- ´23. 02. 09. : 2030서울시 도시재생전략계획 변경 공고

- ´23. 02. 22. : 도시재생활성화수립 재구조화 용역(2차) 착수보고

- ´23. 03. 17 ~ 4. 20. : 모아타운 주민설명회(3회), 주민간담회 개최

- ´23. 05. 24. : 생활SOC 시설 서울시 주거환경개선자문단 자문 및 계획(안) 사전컨설팅

- ´23. 07. 27. : 도시재생위원회 사전자문

- ´23. 08. 22. : 망우본동 도시재생활성화계획(안) 주민공청회 개최

나. 향후계획

- ´23. 09. 04. ~ 15. : 망우본동 도시재생활성화계획(안) 구의회 의견청취

- ´23. 10.  : 서울시 투자심사

- ´23. 10.  : 서울시 도시재생위원회 심의

- ´23. 12.  : 망우본동도시재생활성화계획 확정 고시

- ´24. 01. ~ : 활성화계획에 따른 마중물 사업 실행

- ´25. 12.  : 생활SOC 시설 준공 및 시설 입주

다. 사업대상지 위치도 (망우본동 도시재생활성화지역)

4. 주요토의과제: 주요쟁점사항이 없음