도시계획시설(공원 : 구릉산 청남공원) 결정안

구의회 의견청취 심사보고서

2020년 6월 4일

1. 심사경과

가. 제출일자 및 제출자 : 2020년 5월 14일, 중랑구청장 제출

나. 회부일자 : 2020년 5월 18일 회부

다. 상정일자 : 제240회 중랑구의회 정례회
제1차 복지건설위원회 (2020년 6월 4일) 심사․의결

2. 제안설명 요지 (제안설명자 : 도시계획과장 김기우)

가. 제안이유

민간 기업으로부터 기부받은 신내동 산2-45 일대 토지를 도시계획시설

(공원)로 결정하여 체계적인 공원시설 설치 및 유지관리를 통해 이용객들에게

휴식공간을 제공하고자 하며 , 도시공원 지정을 통해 향후 공원 운영 및

관리체계 일원화, 기 조성된 공원부지(구릉산 청남공원)를 포함하여 근린공원으로

결정 및 조성(안)을  보완하여 특색 있는 공원 조성을 목적으로 함.

나. 제안내용

1) 대상지 개요

(1)청남공원 현황

① 위    치 : 중랑구 신내동 산2-45번지 일대(청남공원)

② 면     적 : 223,100㎡

③ 지역/지구 : 도시지역, 자연녹지지역, 개발제한구역, 공익용산지

④ 시설내용 : 유아숲체험장, 모험놀이터, 캠핑체험장, 광장, 주차장, 산책로 등

⑤ 조 성 비 : 2,300백만원(국비 900, 구비 100, 기부금 1,000, 특교 300)

(2) 청남공원 추진경위

① 2013.05.~2015.05. : 아주그룹 토지 기부(272,956㎡)

※ 기부토지 중 49,856㎡는 세종포천고속도로 부지로 편입(보상비 70억원 중랑장학기금으로 적립)

② 2016.09.30.	: 국토부 환경문화사업 대상지 선정(국비 9억원 지원)

③ 2016.12.30.	: 아주그룹 사업비(10억원) 기부

④ 2017.03.~11.	: 기본 및 실시설계용역 시행

⑤ 2017.12.~2018.10. : 공사시행 및 준공 (’18.11.15. 개원)

⑥ 2019.03.07.~   : 도시계획시설(공원) 결정 용역 시행

3. 향후계획

① 2020.03.~04. : 주민 의견청취 및 열람공고, 구의회 의견청취

② 2020.05. : 구 도시계획위원회 자문 및 서울시로 결정 요청

③ 2020.06.~07. : 서울시 도시계획위원회 심의 및 도시관리계획 결정․고시

④ 2020.08.~09. : 공원조성계획 입안 및 도시공원위원회 심의

⑤ 2020.10. : 공원조성계획 결정 고시

3. 전문위원 검토보고서 요지 (송재덕 전문위원)

본 의견청취의 건은

① 민간으로부터 기부 받은 토지(223,100㎡)는 개발제한구역으로 시설 설치에

제약이 있어 공원으로 결정하여 공원조성계획에 따른 시설물 설치를 위한 도시계획

시설(공원)으로 결정하고자 구의회 의견청취를 한 내용임.

② 2020년 현재 기반시설,유희시설,휴양시설,운동시설,편익시설,관리시설은

기 조성된 상태이며, 녹지 등 기타가 94,5%로 구성.

③ 향후 공원관리에 매년 막대한 예산이 집행되어질 것으로 판단되며,

근린공원으로 조속히 지정된다면 서울시로부터 공원관리에 필요한 예산은

지원받을 수 있을 것으로 판단됨.

4. 질의 및 답변요지 : 추후 회의록 참조

5. 토론요지 : 없음

6. 심사결과 : 찬성 의견

7. 소수의견의 요지 : 없음

8. 기타 필요한 사항 : 없음